11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 함평군에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
해보농공단지 폐수처리장 설치	4,270	-	4,270	-	2015	2014	85.0
동함평일반산업단지 공업용수도 설치	2,931	-	2,626	305	2015	2014	99.0
동함평일반산업단지 폐수처리장 및 도로시설	25,000	1,000	12,700	11,300	2016	2014	80.0
도시가스 공급사업	14,512	-	7,948	6,564	2019	2014	96.0
야구장 시설보강 및 다목적선수합숙소 리모델링	2,000	-	900	1,100	2016	2014	25.0
해보 농어촌 생활용수개발	4,380	-	400	3,980	2016	2014	40.0
손불 농어촌 생활용수개발	8,700	-	-	8,700	2017	2014	5.0
학교 농어촌 생활용수개발	5,300	-	-	5,300	2017	2014	5.0
함평군 가축분뇨 공공처리시설 개선사업	2,430	-	108	2,322	2015	2014	28.0
구산지구 마을하수도 정비사업	5,448	-	50	5,398	2017	2014	5.0
함평돌머리지구 연안유휴지개발	10,000	930	2,470	6,600	2017	2014	30.0
남부권표고버섯 톱밥배지센터조성	6,000	-	900	5,100	2015	2014	50.0
함평천지열매 공원조성	3,000	-	-	3,000	2017	2014	10.0

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

해보 농공단지 폐수처리장 설치

담당자

전략경영과 장택근

(☎061-320-3867)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해보 농공단지 입주업체에서 배출되는 오수 및 폐수에 대하여 적정처리로       공공수역의 수질개선 및 단지내 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2015(2년간)

○ 위 치 : 함평군 해보면 용산리 579번지 일원

○ 규 모 : 폐수종말처리시설 400톤/일(1단계 200톤/일, 2단계 200톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,270백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,270		4,270
국 비	4,270		4,270
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2012. 12. 18. : 기본계획 승인

○ 2014.  3.  6. : 실시설계 승인

○ 2016.  6.  5. : 공사착수

□ 향후계획

○ 공사 완료   : 2015.  8.

○ 시운전 착수 : 2015.  9.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 5,601백만원 → 변경 4,270백만원(△1,331백만원)

- 변경사유 : 실시설계 승인결과 반영

사업명

동함평 일반산업단지 공업용수도 설치

담당자

전략경영과 장택근

(☎061-320-3867)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동함평 일반산업단지내 입주업체의 안정적인 공업용수 공급으로 산업기반       시설확충 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2015(2년간)

○ 위 치 : 함평군 함평읍 함평리 ~ 대동면 백호리 일원

○ 규 모 : 급수관로 6.27km, 배수지 2,000톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,931백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,931		2,626	305
국 비	2,931		2,626	305
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2014. 12.  2. : 공사착수

□ 향후계획

○ 공사 완료       : 2015.  7.

○ 시설물 인계인수 : 2015.  8.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

동함평 일반산업단지 폐수처리장 및 도로시설

담당자

전략경영과 장택근

(☎061-320-3867)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군은 농업위주 1차 산업으로 구성되어 있어 갈수록 지역경제 침체와       낙후가 심화되어 기업유치를 통해 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2016(5년간)

○ 위 치 : 함평군 학교면 마산리 일원

○ 규 모 : 단지조성 735,080㎡, 폐수처리장 900톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	25,000	1,000	12,700	2,600	8,700
국 비	8,400		500	1,800	6,100
시 도 비	2,000	1,000	1,000
시군구비	14,600		11,200	800	2,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2013.  7. 31. : 단지조성공사 착수

○ 2015.  3.  4. : 단지조성공사 완료

○ 2015.  5. 27. : 폐수처리장 재원협의 완료

□ 향후계획

○ 폐수처리장 공사 착수     : 2015.  8.

○ 폐수처리장 공사 완료     : 2016. 12.

○ 시설물 인계인수          : 2016. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

도시가스 공급사업

담당자

지역경제과 임희석

(☎061-320-3352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천연가스 공급으로 서민가계비 경감 및 기업유치 활성화 도모

○ 대기오염개선 및 저공해 가스 사용으로 청정함평 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2019년

○ 위 치 : 함평읍, 학교면(동함평산업단지, 무지개마을, 학교농공단지 등)

○ 규 모 : 도시가스 배관 29km 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,512백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	14,512		7,948	2,632	3,932
국 비
시 도 비	400			200	200
시군구비	7,256		3,974	1,316	1,966
지 방 채
민간자본	6,856		3,974	1,116	1,766
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 96%)

○ 업무협약 체결   : 2013. 12. 24.(함평군⇔㈜해양도시가스)

○ 공급사업 기공식 : 2014.  3. 25. (배관공사 착공 - 2014. 3. 26.)

○ 도시가스 최초 공급(거송라뷔랑아파트) : 2014. 12. 17.

○ 2015. 7. 현재 배관 27.9km 설치(계획대비 96%)

- 1,192세대 공급(공동주택858, 단독주택 266, 산업용 4, 영업용 61, 업무용 1)

□ 향후계획

○ 2015년도 사업구간 협의(추가 사업 대상지 등 협의) : 2015. 7.

○ 2015년도 사업구간 공사 : 2015. 8. ~

- 명암농공단지 및 추가 사업 대상지

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

야구장 시설보강 및 다목적

선수합숙소 리모델링

담당자

문화관광체육과 박정현

(☎061-320-3762)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 함평야구장 신축으로 전국의 많은 야구동호인들이 관내 야구장 및 합숙소를 이용 할 것이 예상되며, 현재 운영 중인 나비베이스타운(합숙소)은 구(舊) 대동초등학교를 리모델링한 건물로 시설이 노후화되어 안전사고 마저 우려되는 실정임. 이에 안전하고 편리한 현대식 합숙소 건립으로 사용자 편의 제공

□ 사업개요

◦ 기   간 : 2015년 4월 ～ 2016년 6월

◦ 위   치 : 함평군 대동면 용성리 687번지

◦ 규   모 : 부지면적 3,305㎡, 건축공사 - 363㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

◦ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,000		900	1,100
국 비	600		270	330
시 도 비
시군구비	1,400		630	770
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25.0%)

◦ 타당성검토 및 기본계획 구상 : 2013. 1. ～ 8.

◦ 중기지방재정계획 반영 : 2014. 08.

◦ 각종 자료수집 및 기본계획 수립 : 2014. 12.

◦ 도시계획시설 변경 결정 용역 시행 : 2015. 6.

◦ 기본 및 실시설계 발주 : 2015. 6.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2015. 4. ～ 2016. 6.

○ 공사착공 및 준공 : 2015. 9. ～ 2016. 12.

사업명

해보 농어촌 생활용수개발

담당자

환경상하수도과 이수병

(☎061-320-3816)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함평군 해보면 일원에 상수도 시설을 확충하여 안전하고 깨끗한 양질의

수돗물을 공급함으로써 생활환경 개선 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014년 ~ 2016년(3년)

○ 위    치 : 전남 함평군 학교면 일원

○ 규    모 : 급배수관로 L=41.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,380		400	2,500	1,480
국 비	3,066		280	1,750	1,036
시 도 비	394		36	225	133
시군구비	920		84	525	311
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 배수관로 L= 16km매설

□ 향후계획

○ 3차사업(2016년도분) 시행 : 2016.  1.

○ 사   업   준   공       : 2016. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

손불·신광 농어촌 생활용수개발

담당자

환경상하수도과 이수병

(☎061-320-3816)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함평군 손불면, 신광면 일원에 상수도 시설을 확충하여 안전하고 깨끗한       양질의 수돗물을 공급함으로써 생활환경 개선 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015년 ~ 2017년(3년)

○ 위    치 : 전남 함평군 손불면, 신광면 일원

○ 규    모 : 급배수관로 L=79.0km, 가압시설 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,700			1,500	7,200
국 비	6,090			1,050	5,040
시 도 비	783			135	648
시군구비	1,827			315	1,512
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 용역 완료

○ 행정절차 이행중

□ 향후계획

○ 도 계약심사 : 2015. 8.

○ 공 사 착 공 : 2015. 9.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

학교 농어촌 생활용수개발

담당자

환경상하수도과 이수병

(☎061-320-3816)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함평군 학교면 일원에 상수도 시설을 확충하여 안전하고 깨끗한 양질의

수돗물을 공급함으로써 생활환경 개선 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015년 ~ 2017년(3년)

○ 위    치 : 전남 함평군 학교면 일원

○ 규    모 : 급배수관로 L=59.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,300			500	4,800
국 비	3,710			350	3,360
시 도 비	477			45	433
시군구비	1,113			105	1,008
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역 추진중

□ 향후계획

○ 행정절차이행 : 2015.  8.

○ 공 사 착 공 : 2015. 10.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

함평군 가축분뇨

공공처리시설 개선사업

담당자

환경상하수도과 김준성

(☎061-320-3338)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가축분뇨 설비 현대화로 처리비 및 유지관리비 절감

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014 ~ 2015. 12. 31.(2년간)

○ 위    치 : 함평군 엄다면 영산로 3416-88

○ 규    모 : 계장설비 1식, 기계·전기 설비 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,430		108	2,322
국 비	1,944		86	1,858
시 도 비
시군구비	486		22	464
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

○ 개선사업 착공 : 2015. 04. 29.

○ 개선사업 추진중(관급자재 제작)

□ 향후계획

○ 설비 철거 및 자재 설치 : 2015. 11. 30.

○ 시운전 및 준공         : 2015. 12. 31.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

구산지구 마을하수도 정비사업

담당자

환경상하수도과 김재열

(☎061-320-3545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을단위로 각 가정에서 발생된 오수를 차집하여 적정처리함으로서 방류       수역 수질 보전 및 쾌적한 주거환경 조성

○ 농어촌 주거환경개선 및 지역주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015년 ~ 2017년(3년)

○ 위    치 : 전남 함평군 나산면 일원

○ 규    모 : 하수처리시설 65톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,448백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,448		50	479	4,919
국 비	3,814			300	3,514
시 도 비
시군구비	1,634		50	179	1,405
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 용역 완료

○ 행정절차 이행중

□ 향후계획

○ 사업 착공 : 2015.  10.

○ 사업 준공 : 2017.  12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

함평 돌머리지구 연안유휴지 개발

담당자

축수산과 정승호

(☎061-320-3412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 돌머리 연안 유휴지를 활용하여 국민 여가·휴양시설 조성으로 해양관광 진흥과 지역 경제 활설화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ~ 2017.

○ 위 치 : 함평군 함평읍 석성리 돌머리 해변 일원

○ 규 모 : 약 70,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	10,000	930	2,470		6,600
국 비	5,000	700	1,000		3,300
시 도 비
시군구비	5,000	230	1,470		3,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 1단계 사업 공사 계약 및 착공                    : 2014. 12.

○ 2단계 사업 실시계획수립 및 관련 인허가 협의 중  : 2015. 01. ~

□ 향후계획

○ 2단계 사업 실시계획 승인(해수부)                 : 2015. 08.

○ 2단계 사업 공사(총괄) 발주                       : 2015. 10.

○ 공사(총괄) 준공                                  : 2017. 06.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

남부권표고버섯톱밥배지센터조성

담당자

산림공원사업소 강수진 (☎061-320-3422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우량 톱밥배지와 선진 재배기술 보급의 전진기지 역할 수행

○ 기능성 자연식품의 생산 및 가공사업으로 발전하기 위한 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2015년(2개년)

○ 위 치 : 함평군 대동면 강운리 799-3번지 일원

○ 규 모 : 19,736㎡(시설규모 5,026㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,000		900	5,100
국 비	3,000		450	2,550
시 도 비	600		90	510
시군구비	600		90	510
지 방 채
민간자본	1,800		270	1,530
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2014. 2. 27. : 보조금교부결정

○ 2014. 8. 27. : 사업대상부지 매입 및 등기완료

○ 2015. 3. 16. : 건축 허가 승인

○ 2015. 5. 16. : 건축공사 착수

□ 향후계획

○ 2015. 10.  : 톱밥배지센터 준공

사업명

함평천지 열매공원 조성

담당자

산림공원사업소 이용범

(☎061-320-3752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 최초의 열매를 활용하는 열매숲을 조성하여 계절별 볼거리를

제공하고 풍요로운 함평의 이미지제고와 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017

○ 위 치 : 함평읍 내교리 곤봉산 일원

○ 규 모 : 5ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000			600	2,400
국 비	1,500			300	1,200
시 도 비
시군구비	1,500			300	1,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본계획 용역 완료 : 2014. 05. 09.

○ 군투융자심사 완료  : 2014. 12. 04.

○ 실시설계용역 추진  : 2015. 04. 02 ~ 09. 30.

○ 건설기술심의 완료  : 2015. 06. 18.

□ 향후계획

○ 전라남도 계약심사 : 2015. 08.

○ 공사 착공 : 2015 . 09