9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 함평군에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
제17회 함평나비대축제	1,000	-	1,000	-	2015	2015	100
추사김정희관련 작품기증유치	3,500	-	-	3,500	2017	2015	70
함평군다목적 국민체육센터건립	3,500	-	-	-	2015	2015	20
2015대한민국국향대전	840	-	840	-	2015	2015	100
용천사권 관광개발사업	9,200	-	70	9,130	2019	2015	20
생활체육훈련 시설물 합숙소 건립 및 보강	2,100	-	583	1,517	2016	2015	85
한돈육가공시설 및 체험장 건립	3,700	-	-	3,700	2016	2015	30
해상재난대피로설치 (해안도로)	20,500	-	2,620	17,880	2,020	2015	10

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제17회함평나비대축제

담당자

문화관광체육과 문용경(☎320-3364)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 글로벌축제로 발전시켜 생태 체험관광 이미지 제고 및 지역 농‧특산품 판매로 군민소득 증대 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015. 5. 1. ~ 5. 10. / 10일간

○ 위  치 : 함평엑스포공원 일원

○ 사업량

- 꽃‧나비‧곤충을 소재로 한 각종 전시 및 체험프로그램

- 공연행사 및 지역주민들 참여하는 농특축산물 전시 및 판매

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,000		1,000
국 비
시 도 비
시군구비	1,000		1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전라남도 지방재정투자 심사완료 : 2015. 2. 27.

○ 기본계획 수립 및 자료수집      : 2014. 12. ~ 2015. 1.

○ 참여단체 선정 및 기반시설정비  : 2015. 3. ~ 2015. 4.

○ 축제개막                       : 2015. 5.

○ 축제 사업비 정산               : 2015. 5. ~ 2015. 7.

□ 향후계획

○ 2016 ~ 2017년 개최계획 수립    : 2016. ~ 2017.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

추사김정희관련작품기증유치

담당자

문화관광체육과 이리라(☎320-2275)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거점고교 추진으로 폐교예정인 함평여중고 부지에 전남도교육청에서 가칭 추사 김정희 박물관을 건립하여 박물관 운영에 필요한 추사관련 작품과 엑스포공원, 양서파충류생태공원과 연계한 관광벨트 조성

○ 우수 문화유산을 확보하여 문화·예술발전에 기여하고 관광자원으로 활용

□ 사업개요

○ 사업명 : 추사 김정희 관련 작품 확보

○ 기  간 : 2015 ~ 2017 (3년)

○ 규  모 : 80점(추사 관련 작품구입 및 기증)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	350	0	0	200	150
국 비
시 도 비
시군구비	350	0	0	200	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 추사 김정희 관련작품 확보 완료 : 2016.03.03.

※ 제1·2차 구입대금 지급(20억원)

□ 향후계획

○ 제3차 구입대금 지급 : 2017년 3월중

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함평군 다목적국민체육센터 건립

담당자

문화관광체육과 박정현(☎320-3762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육관 기능 뿐만 아니라 문화시설 추가 설치도 가능한 바, 관내

문화예술회관등 공연장 부재로 각종 지역행사에 필요한 다목적 체육관형         생활체육시설 확보 시급함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 착공일로부터 2년

○ 위 치 : 함평군 대동면 함장로 1377

○ 규 모 : 다목적체육관 900㎡, 체력측정실 100㎡, 헬스장 150㎡,

다목적실 400㎡, 기타 부대시설 250㎡ 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,500				3,500
국 비	3,300				3,300
시 도 비
시군구비	200				200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 타당성 검토 및 사업계획 구상                : 2015.  6.

○ 다목적 국민체육센터 사업계획 수립           : 2015.  9.

○ 중기지방재정계획 반영                       : 2015.  9.

○ 공유재산관리계획 수립(의회 승인)             : 2015. 11.

○ 국민체육진흥기금 지원사업 공모 신청         : 2016.  2.

□ 향후계획

○ 국민체육센터 건립관련 각종 자료수집 등

○ 2017년도 국민체육진흥기금 재공모

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2015대한민국 국향대전

담당자

문화관광체육과 문용경(☎320-3364)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함평나비대축제와 함께 명품축제로 자리매김하고 있는 국향대전 개최는 사계절 관광객 유치로 지역경제 활성화 및 관광함평의 입지 제고

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015. 10. 23. ~ 11. 8. / 17일간

○ 위  치 : 함평엑스포공원 일원

○ 사업량

- 대형국화조형물 및 국화분재 전시 등 다양한 전시프로그램

- 각종 전시·공연행사 및 지역주민들 참여하는 농특축산물 전시 및 판매

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 830백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	830		830
국 비
시 도 비
시군구비	830		830
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전라남도 지방재정투자 심사완료 : 2015. 10. 26.

○ 기본계획 수립 및 자료수집      : 2015. 6. ~ 2015. 8.

○ 참여단체 선정 및 기반시설정비  : 2015. 9. ~ 2015. 10.

○ 축제개막                       : 2015. 10. ~ 2015. 11.

○ 축제 사업비 정산               : 2015. 11. ~ 2015. 12.

□ 향후계획

○ 2016 ~ 2017년 개최계획 수립    : 2016. ~ 2017.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

용천사권 관광개발사업

담당자

문화관광체육과 김온(☎320-3255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용천사 일원 생태환경과 관광자원을 활용한 특화단지 개발로 관광객 유치 및 지역발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 함평군 해보면 광암리, 대각리 일원

○ 규 모 : 295,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,200		70	1,060	8,070
국 비	4,640				4,640
시 도 비
시군구비	4,160		70	1,060	3,030
지 방 채
민간자본	400				400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 수립 및 타당성 조사   : 2014. 12. ~ 2015. 9.

○ 전라남도 지방재정투자 심사완료 : 2015. 10. 26.

○ 기본계획 주민설명회 개최(3회)   : 2016. 1. 8.

□ 향후계획

○ 군관리 계획 및 실시설계용역 시행 : 2016. 10. ~ 2017. 05.

○ 토지보상 등 행정절차 진행        : 2016. 10. ~ 2017. 05.

○ 실시계획인가, 계약심사           : 2016. 10. ~ 2017. 05.

○ 사업 시행                        : 2018. ~ 2019.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

생활체육훈련 시설물 합숙소 건립 및 보강

담당자

문화관광체육과 박정현(☎320-3762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화체육센터, 공설운동장, 궁도장 등 주요 공공체육시설물이 인접한곳에 신규 합숙소를 건립하여 지역체육발전 시너지 효과 도모

○ 골프연습장 노후시설 교체를 통한 이용자 불편사항 감소 및 안전 보강으로  안전한 체육활동 참여여건 마련

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015년 12월 ～ 2016년 6월

○ 위    치 : 함평군 대동면 함장로 1377

○ 규    모 : 대지면적(115,772㎡), 건축면적(348.12㎡)지상 3층, 연면적(862.74㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,100	900	900	1,200
국 비	600	270	270	330
시 도 비
시군구비	1,500	630	630	870
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 중기 지방재정계획 반영                          : 2014. 08.

○ 각종 자료수집 및 기본계획 수립                  : 2014. 12.

○ 현지조사 결과 기본계획 수립 변경                : 2015. 02.

○ 사업계획 변경(기존 합숙소 리모델링 ⇒ 신규 합숙소 건립)반영 : 2015. 05.

○ 기본 및 실시설계 용역 발주 및 계약              : 2015. 06.

○ 시설물 보강 안전점검 실시 의뢰                  : 2015. 07.

○ 군계획시설(운동장) 변경 결정 용역 발주           : 2015. 07.

○ 기본 및 실시설계 용역완료                       : 2015. 10.

○ 군 건설기술심의 완료                            : 2015. 11.

□ 향후계획

○ 공사준공                                       : 2016. 08.

○ 집기부품등 구입 및 설치완료                    : 2016. 10.

○ 운영준비 및 개장식                             : 2016. 10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

한돈육가공시설 및 체험장 건립

담당자

축수산과 김현철(☎320-3455)

□ 사업목적 및 필요성

○ 비선호 부위를 활용하여, 국내소비 여건에 적합한 발효생햄 생산으로

고부가가치 축산물 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 3월 ~ 12월

○ 위 치 : 함평군 학교면 동함평산단길 34-58

○ 규 모 : 가공공장 및 제조시설 1,712㎡(연면적 2,344㎡, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,700			3,700
국 비	1,250			1,250
시 도 비
시군구비	250			250
지 방 채
민간자본	2,200			2,200
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 건축허가 : 가공공장 및 제조시설 1,712㎡(연면적 2,344㎡, 지상2층)

(2016. 3. 14)

○ 건축물 착공 : 2016. 6월

□ 향후계획

○ 건축물 준공 : 2016. 9월

○ 내부시설 및 제조시설 완공 : 2016. 10월

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

해상재난대피로 설치

담당자

안전건설과 박상균

(☎320-3488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원전피해, 태풍, 해일 등 유사시에는 재난도로, 평상시 주민들의 농·어업                기반시설로 활용

○ 전체적인 해안도로 연결로 함평만 바다의 조망권을 확보, 해안경관 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2020년

○ 위 치 : 함평군 함평읍, 손불면 일원

○ 규 모 : L=8.5km, B=11.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	20,500	1,610	1,010	1,610	16,270
국 비
시 도 비	14,350	1,610	1,010	1,610	10,120
시군구비	6,150				6,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 해안도로 기본계획 용역 완료            : 2015. 02. 02

○ 기본 및 실시설계 용역 착수             : 2015. 07. 28

○ 소규모 환경영향평가 용역 착수          : 2015. 08. 19.

○ 중앙 지방재정투자심사 결과 통보        : 2015. 11. 04.

○ 유관기관 및 관련실과 협의              : 2015. 11. 20.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 완료             : 2016. 07.

○ 토지 및 지장물 보상 등                 : 2016. 08.

○ 공사 및 감리 발주 등                   : 2016. 09.